의 안 번 호			제출연월일: 2023. 11. .
			제 출 자: 안 성 시 장

제출부서		하수도과

공도읍 중복리 배수펌프장 설치사업

1. 제안이유

- 공도읍 중복리 일원 강우 시 상습 침수로 주택침수(131동)가 매년 반복적으로 발생함에 따라 본 지역의 침수 방지를 위한 배수펌프장을 설치하여 자연재해 발생을 예방하고자 의결을 요청하는 사항임

2. 주요내용

○ 건물취득(건물의 신축)

- 위    치 : 공도읍 중복리 583(인접 141-3)번지 일원

- 건축연면적 : 60㎡(펌프실, 저류조 4,000㎥)

- 건물구조 : 철근·콘크리트 구조

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026.12.

- 사 업 비 : 2,100,000천원(건축비, 설계비, 감리비 포함)

- 재    원 : 시비100%

○ 토지취득

- 위    치 : 공도읍 중복리 583(인접 141-3)번지 일원

- 매입면적 : 5,000㎡

- 취득가격 : 900,000천원

- 취득목적 : 배수펌프장 및 저류시설 설치

- 재    원 : 시비 100%

3. 사전절차 이행사항

중기지방재정계획반영여부	여	투자심사결과	적정

4. 취득재산

(단위 : ㎡, 천원)

일련 번호	구분	재산표시			취득 수량	금 액		취득 시기	취득사유	취득재산 소유자	비 고
		소 재 지	지목	면 적		기준가격	추정가액
1	건물	공도읍 중복리 583	하천	60	1개동	-	2,100,000	2026	배수펌프장 신설	안성시
2	토지	공도읍 중복리 583	하천	5,000	1필지	-	900,000	2025	배수펌프장 신설	국(환경부)

※ 금액기준		기준가격 : 토지-개별공시지가, 건물-시가표준액, 건물신․증축-건축비 및 시설비
		추정가액 : 주변실거래가(향후 감정평가에 따라 달라질 수 있음)

5. 사업계획서, 비용추계서 : 붙임

【붙임 1】

공도읍 중복리 배수펌프장 설치사업

◈ 공도읍 중복리 일원 강우 시 상습 침수 주택 침수(131동)가 매년

반복적으로 발생함에 따라 본 지역의 침수 방지를 위한 배수

펌프장을 설치하여 자연재해 방생을 예방하고자 추진하는 사업임.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 공도읍 중복리 배수펌프장 설치사업

○ 위    치 : 공도읍 중복리 583번지 일원

○ 사 업 비 : 30억원

○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.

○ 사 업 량

- 배수펌프장 설치 1식(4,000톤/h)

- 토지매입 1식(1필지, 5,000㎡)

※ 수혜면젹 : 13.05ha, 131가구

□ 추진계획

○‘24.  2. : 기본 및 실시설계용역 착수

○‘24. 11. : 도시계획 시설결정

○‘24. 12. : 기본 및 실시설계용역 준공

○‘25.  1. ~ '25.  2. : 토지 보상 및 취득

○‘25.  3. ~ '26. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

○ 재해방지시설을 설치하여 도시 내수 침수 예방 및 주민 재산 피해 최소화

□ 위치도 및 현황사진

【붙임 1】

비 용 추 계 서

1. 비용 발생 요인 및 관련조문

가. 관련조문

○ 공유재산 및 물품관리법 제10조

○ 공유재산 및 물품관리법 시행령 제7조

○ 안성시 공유재산관리 조례 제11조 제1항

나. 비용 발생 요인

○ 집중호우 시 공도읍 중복리 저지대 상습 침수로 주택 등 침수피해가 매년 반복적으로 발생하고 있어 수해 피해를 예방하고자 배수 펌프장 설치사업을 추진하고자 함.

2. 비용추계

가. 비용추계의 전제

○ 총사업비: 3,000,000천원

- 공 사 비: 1,900,000천원[건축, 기계설비(배수펌프), 저류조 등]

- 기본, 실시설계용역: 150,000천원

- 감리비 및 부대비: 50,000천원

- 토지보상비: 900,000천원

○ 건물취득

- 위    치: 공도읍 중복리 583번지 일원

- 건축연면적: 60㎡(저류조 25,000㎥)

- 건물구조: 철근․콘크리트조

- 사 업 비: 1,900,000천원

○ 토지취득

- 위     치: 공도읍 중복리 583번지 일원

- 매입 면적: 1,813㎡

- 취득 가격: 900,000천원

- 취득 목적: 배수펌프장 설치

○ 재 원 별: 시비 3,000,000천원(100%)

나. 비용추계결과

(단위: ㎡, 천원)

구 분		2024년	2025년	2026년	계
총 소요액		150,000	2,850,000	0	3,000,000
공공 하수 처리 시설 증설	기본 및 실시설계비	150,000	0	0	150,000
	토지보상비	0	900,000	0	900,000
	감리ㆍ부대비	0	50,000	0	50,000
	공사비	0	1,900,000	0	1,900,000

다. 재원조달방안

○ 하수도 공기업특별회계 자체 수입

3. 제도개선 등 그 밖에 사항

○ 해당없음

4. 작성자 : 하수도과장 조태완, 하수시설팀장 한병철

< 연도별 비용 추계표 >

(단위: 천원)

구 분		1차연도 (2024년)	2차연도 (2025년)	3차연도 (2026년)	계
세 입		150,000	2,850,000	0	3,000,000
세 출		150,000	2,850,000	0	3,000,000
기본 및 실시설계비		150,000	0	0	150,000
토지보상비		0	900,000	0	900,000
감리ㆍ부대비		0	50,000	0	50,000
공사비		0	1,900,000	0	1,900,000
재원 조달
의존 재원	소 계
	국비
	도비
	시비
자체 수입	소 계
	지방세수입
	세외수입
지방채
기 금
공기업 특별회계		150,000	2,850,000	0	3,000,000
그 밖의 사항 (채무부담, 민자 등)